Załącznik nr 1
do umowy Nr …………..
z dnia ………………

HARMONOGRAM RZECZOWO-TERMINOWY.

HARMONOGRAM RZECZOWO-TERMINOWY
1. Zestawienie materiałów wejściowych przewidzianych do przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego.
Zamawiający w terminie 30 dni do dnia przekazania podpisanej umowy zobowiązany jest do dostarczenia Wykonawcy następujących materiałów (obejmujących obszar sporządzanego planu miejscowego i jego sąsiedztwa):
1) komplet urzędowych kopii map – zgodnie z wymogami określonymi w art. 16 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) komplet aktualnych map katastralnych lub ewidencyjnych; 
3) informacje o właścicielach, użytkownikach wieczystych nieruchomości i innych podmiotach mających do nich tytuł prawny;
4) informacje o użytkach gruntów;
5) obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; 
6) kopię uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego;
7) zebrane przed podpisaniem umowy wnioski na podstawie art. 17 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2. Harmonogram prac nad projektem planu miejscowego.
2.1. Etap I. Prace wstępne. Opracowanie koncepcji planu miejscowego.
1) termin: do ……………. (zgodnie z ofertą) od daty przekazania Wykonawcy podpisanej umowy oraz posiadanych przez Zamawiającego materiałów wejściowych, w tym niezbędnych materiałów geodezyjnych;
2) przedmiot przekazania:
a) propozycja stanowiska w sprawie zgłoszonych wniosków do planu miejscowego) – 1 egzemplarz do przekazania pocztą elektroniczną,
b) koncepcje planu miejscowego  (część tekstowa i rysunkowa) – 1 egzemplarz przygotowany do uzgodnienia z Zamawiającym w wersji papierowej i cyfrowej.
2.2. Etap II. Opracowanie projektu planu miejscowego do opiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną.
1) termin: do 30 dni  od otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego pisemnej akceptacji koncepcji planu  miejscowego  z ewentualnymi uwagami;
2) przedmiot przekazania:
a) projekt planu  miejscowego przygotowany do procedury opiniowania przez Gminną komisję urbanistyczno - architektoniczną (uchwała + rysunek) – w wersji cyfrowej + egzemplarz do dokumentacji,
b) opracowanie ekofizjograficzne – 1 egzemplarz w wersji papierowej i cyfrowej,
c) prognoza oddziaływania na środowisko – 1 egzemplarz w wersji papierowej i cyfrowej.

2.3. Etap III. Opracowanie projektu planu miejscowego do opiniowania i uzgadniania przez organy inne niż Komisja urbanistyczno - architektoniczna.
1) termin: do 14 dni od otrzymania od Zamawiającego pisemnej akceptacji projektu planu  miejscowego z ewentualnymi uwagami;
2) przedmiot przekazania:
a) projekt planu  miejscowego przygotowany do procedury opiniowania i uzgadniania (uchwała + rysunek) – w wersji cyfrowej + niezbędna ilość egzemplarzy dla przeprowadzenia procedury opiniowania i uzgadniania (dopuszczalne są egzemplarze z pomniejszonym czytelnym rysunkiem na papierze i w technice cyfrowej),
b) prognoza oddziaływania na środowisko – 1 egzemplarz w wersji papierowej i cyfrowej + niezbędna ilość egzemplarzy dla przeprowadzenia procedury opiniowania i uzgadniania,
c) projekty wystąpień o opinię do projektu miejscowego planu wraz z rozdzielnikami –1 komplet do przekazania pocztą elektroniczną,
d) projekty wystąpień o uzgodnienie do projektu planu miejscowego wraz z rozdzielnikami – 1 komplet do przekazania pocztą elektroniczną.

2.4. Etap IV. Ewentualna korekta projektu planu miejscowego w wyniku procedury opiniowania i uzgadniania projektu planu miejscowego 
1) termin: do 14 dni od otrzymania od Zamawiającego ostatniego uzgodnienia lub opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
2) przedmiot przekazania:
a) projekt miejscowego planu  (uchwała + rysunek) – tylko w przypadku, gdy zaistnieje konieczność wprowadzenia korekt w wersji przekazanej w poprzednim etapie – w wersji papierowej i cyfrowej,
b) prognoza oddziaływania na środowisko – tylko w przypadku, gdy zaistnieje konieczność wprowadzenia korekt w wersji przekazanej w poprzednim etapie – 1 egzemplarz w wersji papierowej i cyfrowej,
c) wzór obwieszczenia i ogłoszenia prasowego zawiadamiających o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu i o wyznaczeniu terminu, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu miejscowego planu – 1 komplet do przekazania pocztą elektroniczną.
d) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zmiany planu): uchwała + rysunek, z zachowaniem skali – egzemplarz do wyłożenia do publicznego wglądu.

2.5. Etap V. Ewentualna korekta projektu planu miejscowego w wyniku procedury wyłożenia.
1) termin: do 14 dni od otrzymania ostatniej uwagi do projektu miejscowego planu albo od otrzymania od Zamawiającego informacji, że w ustalonym terminie żadna uwaga nie wpłynęła, a w przypadku konieczności ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu – od otrzymania ostatniego uzgodnienia;
2) przedmiot przekazania:
a) propozycja stanowiska w sprawie zgłoszonych uwag do projektu miejscowego planu (1 egzemplarz do przekazania pocztą elektroniczną,
b) projekt wystąpienia o ponowne uzgodnienie projektu miejscowego planu wraz z rozdzielnikiem (tylko w przypadku wystąpienia konieczności dokonania uzupełniających uzgodnień) - 1 komplet do przekazania pocztą elektroniczną,
c) projekt miejscowego planu (uchwała + rysunek) – tylko w przypadku, gdy zaistnieje konieczność dokonania korekty zapisów w wyniku zmian dotychczasowej wersji projektu miejscowego planu – 1 egzemplarz w wersji papierowej i cyfrowej,
d) lista nieuwzględnionych uwag – 1 egzemplarz do przekazania pocztą elektroniczną.
e) załącznik do uchwały, o którym mowa w art. 67a ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977).
f) uzasadnienie do projektu planu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 1 egzemplarz do przekazania pocztą elektroniczną.
2.5. Etap VI. Skompletowanie dokumentacji planistycznej.
1) termin: do 5 dni od terminu uchwalenia planu miejscowego 
2) przedmiot przekazania:
a) uchwała przygotowana do publikacji (tekst uchwały w wersji edytowalnej, rysunek w formacie PDF oraz JPEG) – w ilości wymaganej przez właściwy urząd wojewódzki,
b) rysunek planu – 5 egzemplarzy w wersji papierowej z zachowaniem skali,

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA